DISCIPLINARE DI GARA

Pubblico incanto con il sistema dell’appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la ristrutturazione dell’adduttore idraulico San Giuliano – Ginosa – lotto secondo – Completamento delle opere  principali di cui al progetto BAS 03  (CUP G87H04000030001) 

              					       °°°°°°°°°°°°°°°
Il  presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto

A.	importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e spese per la progettazione esecutiva, compresa la redazione del piano di sicurezza): euro 22.463.507,46 + IVA  di cui:

a)	euro 432.779,26  per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso; 
b)	euro 250.000,00 per spese progettazione esecutiva e redazione piano di sicurezza in fase di progettazione  non soggetti a ribasso;
c)	importo complessivo dei lavori da assoggettare a ribasso  (al netto degli oneri di sicurezza e delle spese per la progettazione esecutiva e redazione piano di sicurezza): euro 21.780.728,20;
d)	lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

I	II	III	IV	V	VI	VII	

    lavorazione	Importo comprensivo degli oneri per la sicurezza e per la prog.esecutiva 

        (euro)	Importo comprensivo degli oneri per la sicurezza e non comprendente gli  oneri di  progettazione (euro)	categoria e
classifica D.P.R.. 34/2000	qualifica-
zione ob-
bligatoria
(si/no)	

   %	Prevalente
 o scorporabile	
Ristrutturazione adduttori
e opere accessorie 
da eseguire a corpo	20.679.573,00	20.449.223,00 
	   OG6
  Classifica       VIII
(illimitata)
	    
  Si	
92,14	
prevalente	
Ristrutturazione
Galleria da eseguire 
a misura	1.783.934,46	1.764.284,46

  	  OS21
Classifica  IV
	   
  Si	
7,86	
Scorporabile/
subappaltabile	

S precisa che la distinzione tra l’importo riportato nella seconda colonna e quello riportato nella terza è dovuta agli oneri previsti per la  progettazione esecutiva. Ciò al fine di applicare, ove occorra, le indicazioni fornite, con Determinazione n. 27 del 16 ottobre 2002  e n. 31 del 18 dicembre 2002 dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, così come meglio in appresso dettagliato.

e)	classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione esecutiva individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali (legge 143/1949 e s. m.): 

classe	Categoria	Lavoro	importo (euro)
compreso oneri di sicurezza	corrispondente categoria del D.P.R. 34/2000	
Classe VIII		Impianti provvista,condotta,distribuzione d’acqua,fognature urbane	20.449.223,00 
	OG6	
Classe IX	Categ.C 	Gallerie,opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali	1.764.284,46
	OS21	

A1.  Gli elaborati del progetto definitivo, il computo metrico, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori necessari  per formulare l’offerta, sono visibili presso il Servizio Tecnico Lavori della Stazione Appaltante all’indirizzo di cui al punto 1.1  del bando nei giorni dal lunedì al venerdì e nelle ore 9 - 13; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la copisteria Eliocopy di Gianluca MADIO sita in Matera alla via Lupo Protospata n°37/A (Tel. 0835.336164), nei giorni feriali dalle ore 9  alle ore 18,  previo versamento alla suddetta copisteria del costo di riproduzione quantificato dalla stessa; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla copisteria  e p.c. alla stazione appaltante di cui al  punto 1.1 del bando, fermo restando che ai fini della procedura di gara  la  Stazione   Appaltante non assume responsabilità e non determinano in capo al concorrente il sorgere di diritti e pretese di sorta nei confronti  della stessa Stazione Appaltante, per eventuali errori o imprecisioni risultanti da detti atti né per eventuali omissioni, incompletezze, imprecisioni risultanti da eventuali copie prodotte su CD-ROM , ovvero per eventuali anomalie che dovessero manifestarsi per qualsiasi motivo nell'uso del software in quanto, ai fini della gara, valgono esclusivamente gli atti depositati presso l’indirizzo  della Stazione Appaltante sopraindicato. (bando, disciplinare di gara, domanda di partecipazione e allegati sono altresì disponibili sul sito internet:  www.regione.basilicata.it e www.infrastrutturetrasporti.it
; 
B. Condizioni relative all’appalto:  Durata dell’appalto o termine di esecuzione:  giorni  960 naturali e consecutivi di cui: 120  giorni decorrenti dalla data dell’apposito ordine di servizio impartito dal responsabile del procedimento, AI SENSI DELL’ART.140 COMMA 1, DEL d.p.r. 554/99  e s.m., per la redazione completa del progetto esecutivo, comprensivo  del piano di sicurezza; 840 giorni dalla data  di consegna dei lavori  per dare ultimate tutte le opere di cui si compone l’intervento.
B1.  Cauzioni e garanzie richieste
o	cauzione provvisoria, conforme al modello (schema tipo) approvato con il D.M. delle Attività Produttive del 12 marzo 2004, n. 123, di importo pari € 444.270,14 (2% dell’ammontare dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza, ai sensi degli artt. 30, commi 1 delle legge n. 109/94 e s. m. e 100 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.;  
o	cauzione definitiva, conforme al modello (schema tipo) approvato con il D.M. delle Attività Produttive del 12 marzo 2004, n. 123,  nella misura e nei modi dell’art. 30 commi 2 della legge n. 109/1994 e s.m., e dell’art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.; 
o	polizza assicurativa, conforme al modello (schema tipo) approvato con il D.M. delle Attività Produttive del 12 marzo 2004, n. 123,  di cui all’art. 30 comma3 della legge 109/94 e s.m. e art. 103 D.P.R. 554/99 con massimali di € 589.855,82 per danni  di esecuzione ed € 589.855,82 per R.C.T; 
o	polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, conforme al modello (schema tipo) approvato con il D.M. delle Attività Produttive del 12 marzo 2004, n. 123, ai sensi  degli artt. 30, comma 4 della legge 109/94 e s.m.i. e 104, comma 1, del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. per un limite di indennizzo pari al 20% del valore dell’opera realizzata;
o	polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, conforme al modello (schema tipo) approvato con il D.M. delle Attività Produttive del 12 marzo 2004, n. 123, ai sensi  degli artt. 30, comma 4 della legge 109/94 e s.m.i. e 104, comma 2, del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. per un massimale di € 5.000.000,00;
o	polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi degli artt. 30, comma5, della legge 109/94 e s.m.i. e 105 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.;
o	polizza assicurativa “All risks” escutibile a prima richiesta, specifica per l’appalto, che tenga indenne l’Amministrazione appaltante dai rischi derivanti dalla cattiva esecuzione dell’opera e che copra anche la responsabilità verso terzi; la relativa polizza dovrà essere preventivamente accettata dall’Amministrazione ed esibita al momento della stipula del contratto. La copertura assicurativa che dovrà avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e fino all’accettazione delle prestazioni rese ai fini dell’appalto, dovrà essere priva di franchigie. I massimali  assicurati dovranno essere i seguenti: 

R.C.T. € 15.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di: € 5.200.000,00 per ogni persona e di € 5.200.000,00 per danni a cose, anche appartenenti a più persone; R.C.O. € 15.500.000,00 per  ogni sinistro con il limite di  € 1.200.000,00 per ogni persona.  
C. 	Principali modalità  di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
 L’opera è finanziata con deliberazione CIPE del 20 dicembre 2004 . Il corrispettivo è corrisposto a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge n. 109/94 e s.m.; non sono previsti né anticipazioni sull’importo contrattuale, né premi di accelerazione.

D. 	Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto 

Possono presentare offerte i concorrenti  di cui all’art. 10, comma1, della legge109/94 e s.m.i. costituiti da imprese singole, riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge 109/94 e s.m.i., nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000 e s.m.i. I consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) e c) della legge 109/94 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
E. Condizioni di partecipazione  
Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere 
E. 1  Situazione giuridica – prove richieste

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti, imprese di costruzioni, per i quali sussistono: 
a)	le cause di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.; 
b)	l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956,  irrogate nei confronti di un convivente;
c)	sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
d)	le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001;
e)	i divieti previsti dall’essere in corso i piani individuali di emersione di cui all’art. 9, comma 2, lett. a) e c), del d.lgs. 231/2001;
f)	l’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
g)	l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s. m.;
h)	l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
i)	l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
j)	la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, ultimo periodo, della legge 109/94 e s. m, da uno dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), della legge n. 109/1994 e s. m. partecipante alla gara.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di progettisti indicati o associati per i quali sussiste/sussistono:
a)	le cause di esclusione di cui all’art. 17, comma 9 della legge n. 109/1994 e s.m. e di cui agli articoli 51 e 52 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.;
b)	l’inesistenza dei requisiti di cui all’art. 53 e 54 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali;
c)	l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956,  irrogate nei confronti di un convivente;
d)	sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
e)	le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001;
f)	l’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
g)	l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.;
h)	l’inosservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

i)	l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
j)	la condizione di essere il soggetto che ha redatto il progetto posto a base di gara;

L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel presente  disciplinare di gara .
E. 2  Capacità economica e finanziaria – tipo di prove richieste
       Capacità tecnica – tipo di prove richieste

Ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di qualificazione dei Costruttori e dei Progettisti partecipanti alle procedure di affidamento degli appalti di Lavori pubblici (L. 109/94; D.P.R. 34/2000; D.P.R. 554/99), per la partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto in oggetto, occorrono i requisiti speciali di seguito indicati.

1.	I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., ai lavori da assumere ed, inoltre, devono essere in possesso, ai sensi dell’art. 19, comma 1-ter, della legge 109/94 e s.m.i.,  dei requisiti previsti per l’affidamento dei servizi di progettazione dell’art. 66 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.  documentati sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica o di progettisti indicati o associati  oppure, in assenza della qualificazione per progettazione, devono indicare o associare per la redazione del progetto esecutivo uno o più progettisti in possesso dei predetti requisiti, nonché devono essere in possesso di una cifra d’affari in lavori, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte l’importo complessivo dell’appalto.
Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, tale requisito deve essere posseduto nella misura di cui all’art. 13 l. n. 109/94 e art. 95 del D.P.R. n. 554/99.
Tale cifra d’affari può essere ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta o indiretta ed è comprovata nei seguenti modi:

-	il requisito della cifra d’affari in lavori relativa alla attività diretta, di cui all’art. 3, comma 6, del DPR 34/2000 è comprovato (art. 18, comma 3, DPR 34/2000):
-	per le ditte individuali, società di persone, dei consorzi, consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili mediante dichiarazioni annuali IVA;
-	per le società di capitali mediante presentazione dei bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee e relativa nota di deposito
- 	Il requisito della cifra d’affari in lavori relativa alla attività indiretta, di cui all’art. 3,comma 6, del DPR 34/2000 è comprovato (art. 18, comma 4, DPR 34/2000) in proporzione alle quote di partecipazione dell’impresa concorrente, con la presentazione dei bilanci riclassificati in conformità alle direttive europee e della relativa nota di deposito, dei consorzi di concorrenti e i GEIE, di cui all’art. 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della legge 109/94 e delle società fra imprese riunite dei quali l’impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.

Ai sensi dell’art. 19, comma 1-ter della legge 109/94 e s.m.i e sulla base di quanto riportato dalle richiamate Determinazioni n. 27 del 16 ottobre 2002 e n. 31 del 18 dicembre 2002 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici : 
-	i concorrenti provvisti di attestazione di qualificazione SOA per prestazioni di costruzione e progettazione, nel caso dispongono dei sotto indicati requisiti progettuali prescritti dall’art. 66  del D.P.R. 554/94 e s.m.i., devono attestare il possesso con le modalità nel prosieguo indicate; qualora invece, non siano in possesso, devono associare o individuare un progettista che li  abbia;
-	i concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione, devono soddisfare il possesso dei sotto indicati requisiti progettuali prescritti dall’art. 66 del D.P.R.  554/99 e s.m.i. associando o individuando un progettista che li abbia;

Si precisa che :
-	ai fini della qualificazione per le prestazioni di sola costruzione , la/e attestazione/i SOA devono coprire l’ammontare dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza, ( nella fattispecie € 20.449.223,00 per la categ. OG6 ed € 1764.284,46  per la categ.OS21;

-	ai fini della qualificazione per le prestazioni di costruzione e progettazione (così come chiarito dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella Determinazione n. 27 del 16 ottobre 2002) è necessario che la relativa classifica (nella fattispecie VIII) sia sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori, della sicurezza e della progettazione (nella fattispecie € 20.679.573,00 per la cat. OG6 ed € 1.783.934,46 per la cat. OS21);

2.	requisiti  di progettazione di cui all’art. 66 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.:

1)	fatturato globale per servizi di progettazione di cui all’art. 50 del D.P.R.  n. 554/1999 e s.m. – realizzato negli ultimi cinque esercizi anteriori alla data di pubblicazione del bando – per un importo almeno pari a tre volte l’importo delle spese di progettazione;
2)	espletamento di servizi di progettazione di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. – svolti negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando – riguardanti lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori da progettare, di importo pari ad almeno due volte gli importi dei lavori di ognuna delle suddette classi e categorie da progettare;
3)	espletamento di due dei suddetti servizi riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie di quelli da progettare, di importo pari ad almeno il 40 per cento dei corrispondenti singoli importi dei lavori da progettare;
4)	numero medio annuo del personale impiegato nei tre anni anteriori alla data del bando – compresi i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua – in misura di almeno 16 unità.

I servizi di ingegneria validi ai fini del soddisfacimento dei requisiti sono quelli iniziati ed ultimati del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Nel caso che il concorrente sia in possesso di attestazione per progettazione e costruzione, ai fini del raggiungimento dei suddetti requisiti di cui ai precedenti numeri 1) 2) e 4) è possibile sommare i requisiti relativi all’attività di servizi svolta dalla struttura tecnica del concorrente e i requisiti relativi all’attività di servizi svolta dai progettisti indicati o associati.

Nel caso di indicazione o associazione di più progettisti i requisiti di cui ai precedenti numeri 1) 2 ) e 4) devono essere posseduti in misura non inferiore al 40% da almeno uno dei soggetti individuati o associati (ivi compresa la eventuale struttura tecnica del concorrente), fermo restando che la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dagli altri individuati o associati (ivi compresa la eventuale struttura tecnica del concorrente).

Il requisito di cui al precedente numero 3) non è cumulabile e deve essere posseduto, per l’intero importo della classe e categoria in questione da almeno uno dei soggetti: struttura tecnica del concorrente o uno dei progettisti individuali o associati..

Il progettista/i individuati  ovvero associati non deve/ono trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., all’atto dell’incarico devono dimostrare la propria regolarità contributiva. Le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’at. 53 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.. Le società  di professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 54 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.. Il progettista, ovvero almeno uno dei progettisti, devono possedere i requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.; si precisa che il professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., dovrà essere indicato anche dal concorrente che dispone sia della qualificazione SOA per prestazioni di costruzione e progettazione che dei prescritti requisiti progettuali.

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara

F.  Criteri di valutazione degli elementi progettuali proposti per la realizzazione dell’opera

OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 35/100;
OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 65/100 di cui punti  60/100 rivenenti da elementi di natura qualitativa e punti 5/100 rivenenti dall’elemento (tempo di esecuzione dei lavori) di natura quantitativa.

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore, di cui all’allegato B del D.P.R. 554/99 e s.m.i., attraverso l'utilizzo della seguente formula:

C(x)= ∑n[Wi*V(x)i]
dove:
•	C(x) rappresenta l’indice di valutazione attribuito all'offerta x; 
•	n è il numero totale di requisiti rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;
•	Wi è il punteggio (peso) attribuito al requisito i-esimo;
•	V(x)i è il coefficiente della prestazione riferito all'offerta x rispetto al requisito i, variabile tra zero ed uno;
•	∑n è la sommatoria.
I coefficienti V(x)i sono determinati:
•	per quanto riguarda la valutazione degli elementi tecnici proposti di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
•	per quanto riguarda la valutazione dell’elemento prezzo e dell’elemento tempo di esecuzione dei lavori, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la Stazione Appaltante, ed il coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.

Relativamente all’offerta tecnica, il punteggio complessivo di 65 punti sarà ripartito, tra i diversi elementi di valutazione, nel seguente modo:

elementi	Punteggio max	
A. valore tecnico delle integrazioni proposte (natura qualitativa)	35	
B. riduzione di impatto (natura qualitativa)	25	
C. tempo di esecuzione dei lavori (natura quantitativa)	5	

Ad ogni singolo elemento di valutazione sarà attribuito il relativo punteggio sulla base dei seguenti sub-criteri:

Elementi	Peso	
A.    Valore tecnico delle integrazioni proposte 		35	
A. 1  Miglioramento dell’efficienza idraulica	30		
A. 2 Miglioramento della resistenza alla corrosione	2		
A. 3   Opere di miglioramento delle caratteristiche statiche dell’adduttore   	3		
B.     Misure per la riduzione dell’impatto dei lavori		25	
B. 1 Misure atte alla mitigazione e ripristino ambientale (All. 1 Decreto CIPE)	3		
       B. 2 Misure atte a mitigare le interferenze dei lavori sul servizio idrico	3		
B. 3 Rimozione e trasporto a discarica delle condotte da dismettere (sifone Bradano)	6		
B. 4 Adeguamento ed utilizzazione delle gallerie in esercizio sull’adduttore Bradano	7		
B. 5 Alternativa di tracciato del San Marco Venella lungo la S.P. di Pizziche	6		
C.    Tempo di esecuzione dei lavori
Il termine di esecuzione, comunque, tenuto conto di quanto previsto nel bando, non potrà essere superiore a 840 (ottocentoquaranta) giorni naturali e consecutivi	                   5	

G.   Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto IV. 3.4) del bando ed all’indirizzo di cui al punto I. 1) del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi. Qualora si intenda consegnare i plichi “a mano” gli stessi potranno essere recapitati solo nei giorni, quarto, terzo e secondo giorno lavorativo avanti la  scadenza del termine perentorio di cui al punto IV 3.4 del bando di gara, (a tal fine la scadenza del termine di cui al punto IV 3.4 del bando è considerato quale primo giorno di scadenza) dalle ore 9,00 alle ore 13,00,  all’ufficio di Segreteria dell’Amministrazione e della Direzione Generale della stazione appaltante ubicata al piano terra della 2^ palazzina  in via Annunziatella, n°64 – Matera - che ne rilascerà apposita ricevuta. A tal fine si precisa che per accedere agli uffici consortili, è necessario munirsi di “PASS” rilasciato dal personale di vigilanza di stanza all’ingresso dell’Ente, previa presentazione di documento di identità.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono  recare  all’esterno  oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti  le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo del plico  rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il  plico deve  contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

- Busta A  - contenente: documentazione amministrativa;
- Busta B - contenente: offerta tecnica ad esclusione dell’indicazione del tempo massimo di esecuzione dei lavori (secondo le indicazioni fornite, con delib. n. 133 del 14 luglio 2004, dall’Autorità per la Vigilanza sui  lavori pubblici); 
- Busta C – contenente:  l’offerta economica, l’indicazione del tempo massimo di esecuzione dei lavori, la lista delle categorie di lavorazione e forniture e le giustificazioni dei prezzi offerti per le voci più significative; 

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

1)	domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

2)	attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione per progettazione e costruzione oppure per costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni;

Si Precisa che, ai fini della partecipazione alla gara, ai concorrenti è richiesto il possesso della “certificazione di qualità” per le classifiche superiori alla II. In caso di raggruppamento di imprese,il possesso di tale certificazione va riferito all’importo dei lavori che la singola impresa intende assumere (Determinazione n. 29 del 6novembre 2002 dell’Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici). Si precisa inoltre che, come disposto dall’art. 49,comma1 del D.P.R. 445/2000, i certificati di conformità CE non possono essere sostituiti da altro documento. Di conseguenza, il possesso della “certificazione di qualità” dovrà essere dimostrato mediante apposita indicazione sull’attestato di qualificazione SOA. Nel caso il concorrente abbia conseguito la certificazione di qualità solo dopo il rilascio dell’attestato SOA ed abbia in corso l’adeguamento dell’attestato SOA medesimo, l’effettivo possesso della certificazione dovrà essere attestato dall’organismo di qualificazione che ha rilasciato l’attestato SOA ( Determinazione n. 29 del 6 novembre 2002 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
		
3)	dichiarazione/i sostitutiva/e rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a)	dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 75, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), del D.P.R. n. 554/99 e s. m. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
b)	attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c)	attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
d)	dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
e)	dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive oppure sanzioni interdittive oppure di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;
f)	indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
g)	attesta l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili;
h)	attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s. m.
i)	attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
j)	attesta di possedere una cifra d’affari in lavori, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base di gara che intende assumere;
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede l’attestazione di qualificazione)
k)	attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori che intende assumere;
l)	elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
(nel caso di consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 109/94 e s. m.)
m)	indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
n)	dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, negli elaborati e  grafici di progetto);
o)	attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
p)	attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
q)	attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 26 della legge n. 109/94 e s. m.;
r)	attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
s)	dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 19, della legge n. 109/94 e s. m. e dell’art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F;
t)	dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
u)	attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
v)	indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni; 
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
x)	dichiara la propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
y)	dichiara di avere ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge 68/99;
z)	indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’art. 18 della legge 55/90 e s. m.,  eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni; 
	(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
aa)	indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
bb)	assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
	(nel caso il concorrente sia in possesso di attestazione di qualificazione di costruzione)
cc)	elenca i nominativi dei progettisti (indicati o associati) a cui intende affidare la progettazione esecutiva;
	(nel caso il concorrente sia in possesso di attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione)
dd)	attesta di possedere i requisiti stabiliti nel bando di gara in relazione alla prestazione di progettazione esecutiva e specifica quali siano i soggetti (concorrente oppure progettisti indicati o associati) che sono titolari dei requisiti e ne indica anche la misura;

4)	dichiarazione/i sostitutiva/e rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali i progettisti indicati o associati o un loro procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a)	dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 51 e 52 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
b)	attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c)	attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
d)	dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956;
e)	dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;
f)	dichiara di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
g)	indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
h)	attesta l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili;
i)	attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e s.m.;
j)	attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
k)	di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana (o dello stato in cui è stabilito);
l)	di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o dello stato in cui è stabilito);
m)	di essere in regola con gli obblighi alla tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
n)	di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti;
 
	(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): 
5)	mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 	autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

6)	Cauzione di cui agli artt. 30, comma 1, della legge 109/94 e s.m.i. e 100 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.,conforme al modello (schematico) approvato con il D.M. delle Attività Produttive  del 12. marzo 2004, n. 123, di importo pari € 444.270,14 ( 2% dell’ammontare dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza) che potrà essere presentata mediante una delle seguenti forme :

a)	quietanza comprovante il versamento in contanti oppure in titoli del debito pubblico all’istituto di credito Banca Meridiana filiale di Matera (ABI 05787 CAB 16100 ) sul c/c n.° 1000209 che dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione dalla gara, dall’impegno di un idoneo fideiussore verso il concorrente, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell’appalto da parte del concorrente medesimo;

b)	fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da uno degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.vo n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Qualora il concorrente opti per la soluzione "a) "(contanti), dovrà indicare, ai fini della restituzione della   cauzione, le coordinate bancarie di riferimento.

Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la garanzia (soluzione "b") deve essere intestata, a pena d'esclusione, a tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento, mentre è sufficiente la sottoscrizione della sola mandataria  (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 15 novembre2004,n. 7380).

Ai fimi della stipula del contratto, l'aggiudicatario dei lavori è inoltre, obbligato a prestare: 

a)  cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui agli artt. 30, comma 2, della legge 109/1994 e s.m.i., e 101 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., conforme  al modello (schema tipo) approvato con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004, n. 123;

b) polizza assicurativa“All risks”escutibile a prima richiesta, specifica per l’appalto, che tenga indenne l’Amministrazione appaltante dai rischi derivanti dalla cattiva esecuzione dell’opera e che copra anche la responsabilità verso terzi; la relativa polizza dovrà essere preventivamente accettata dall’Amministrazione ed esibitala momento della stipula del contratto. La copertura assicurativa che dovrà avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e fino all’accettazione delle prestazioni rese ai fini dell’appalto, dovrà essere priva di franchigie. I massimali  assicurati dovranno essere i seguenti : 
R.C.T.   €  15.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di: € 5.200.000,00 per ogni persona e di €    5.200.000,00 per danni a cose, anche appartenenti a più persone; R.C.O. € 15.500.000,00 per  ogni sinistro con il limite di  € 1.200.000,00 per ogni persona.  
c) 	polizza assicurativa di cui agli artt. 30, comma 3, della legge 109/94 e s.m.i. e 103 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., conforme  al modello (schema tipo) approvato con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004, n. 123, per un massimale di € 589.855,82 che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di € 589.855,82

Ai sensi dell'art. 8, comma 11quater, della legge 109/94 e s.m.i., le cauzioni e le garanzie fidejussorie previste, rispettivamente dai commi 1.e 2 dell' art. 30 della legge 109/94 e s.m.i., possono essere ridotte, del 50%, per le imprese in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati di tale sistema. Sulla base della Determinazione n. 44 del 27 settembre 2000 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, si precisa che:
•	in caso di impresa singola, essa potrà godere del beneficio della riduzione del 50% solo se in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione degli elementi significativi;
•	in caso di associazioni o consorzi, già costituiti o da costituirsi:
­	in caso di raggruppamento orizzontale di imprese, esso potrà godere del beneficio della riduzione del 50% solo se tutte le imprese del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità  ovvero della dichiarazione degli elementi significativi;
­	in caso di raggruppamento verticale di imprese, se tutte le imprese del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione degli elementi significativi, esso potrà godere del beneficio della riduzione del 50%; se, invece, solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione degli elementi significativi, esse potranno godere del beneficio della riduzione del 50% solo per la quota parte ad esse riferibile.

Sempre ai fini della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria ovvero il progettista individuato o associato, dovranno produrre, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, una dichiarazione, da parte di una compagnia di assicurazioni autorizzata, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di Responsabilità. civile professionale a favore del progettista, con riferimento ai lavori oggetto di progettazione. 

Entro venti  giorni a decorrere dalla data di approvazione del progetto esecutivo, dovrà essere prodotta la prescritta polizza di responsabilità civile professionale, nella misura e nei modi di cui all'articolo 30, comma 5, della legge 109/1994 e s.m.i. e dell'ari. 105 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., conforme al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004, n. 123, per un massimale di € 2.500.000,00. 
Infine, con decorrenza  dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, l'aggiudicatario dei 	lavori 	è obbligato a prestare:
a) 	polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, di cui agli arti. 30, comma 4, della legge 109/94 e s.m.i. e 104, comma l, del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., conforme al modello (schema tipo) approvato con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004, n. 123, per un limite di indennizzo pari al 20% del valore dell'opera realizzata;
b) 	polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi per la durata, di cui agli arti. 30, comma 4, della legge 109/94 e s.m.i. e 104, comma 2, del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., conforme al modello (schema tipo) approvato con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004, n. 123,per un massimale di € 5.000.000,00;

7)	dichiarazione rilasciata dalla amministrazione aggiudicataria appaltante che certifichi l’avvenuto sopraluogo;

8)	attestazione rilasciata dalla amministrazione aggiudicataria appaltante della presa visione del progetto;

9)	modello G.A.P., di cui all’art. 2 Legge  n. 726/82  e legge n. 410/91, debitamente compilato;

10)	Ricevuta attestante  il versamento di euro 100,00  a favore dell’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità con delib. del 26 gennaio 2006.

La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al punto 3) deve/devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o 
il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

La/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell’art. 75, comma 1, del D.P.R. 554/1999 e s. m. e quelle di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 3) deve/devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 75, comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. 554/99 e s. m..

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s. m. devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5,  6 e 10 ,  a pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

In considerazione della tempistica della presente gara, le imprese sono invitate a presentare, al momento della presentazione dell’offerta, la documentazione attestante il possesso del requisito della cifra d’affari in lavori di cui al suddetto punto  del presente disciplinare. Detta documentazione dovrà essere contenuta nella busta “A - Documentazione”.

Ove il Concorrente intenda subappaltare, in aggiunta alle lavorazioni "a qualificazione obbligatoria" ulteriori lavorazioni e prestazioni (che pure il concorrente sarebbe in grado di eseguire direttamente o tramite l'eventuale Progettista "Individuato", essendo dotato, direttamente o tramite l' "Individuato", della relativa qualificazione), deve integrare la dichiarazione mediante elencazione puntuale delle suddette lavorazioni e prestazioni aggiuntive che intende subappaltare, al fine di porsi nella condizione di chiedere la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 18 della L. 55/90. A differenza della dichiarazione richiesta a pena di esclusione per le lavorazioni a qualificazione obbligatoria la dichiarazione integrativa di cui al presente capoverso è meramente facoltativa.

In relazione al subappalto di prestazioni inerenti la progettazione esecutiva, si precisa che l’affidamento dell’incarico di progettazione al progettista individuato dal concorrente/appaltatore non è sottoposto alle prescrizioni e ai limiti di cui all’art. 18 L. 55/90. Il subappalto delle prestazioni afferenti la progettazione esecutiva è consentito limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Ai fini del rilascio dell’attestazione di presa visione del progetto a base di gara, la stessa sarà rilasciata dall’amministrazione aggiudicatrice non oltre venti giorni dal termine di cui  al punto IV. 3.4 del bando di gara. 

Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori i concorrenti devono inoltrare all’amministrazione aggiudicatrice, non oltre venti giorni dal termine di cui al punto IV. 3.4 del bando di gara, all’indirizzo di cui al punto I.1) del bando di gara a mezzo fax una richiesta di sopraluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare il sopraluogo. La richiesta deve specificare l’indirizzo i numeri di telefono e di telefax, cui indirizzare la convocazione. Non sono prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati. Ciascun concorrente può indicare al massimo due persone. Non è consentita la indicazione di una stessa persona da più concorrenti. Qualora si verifichi ciò la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione è reso edotto il concorrente. Il sopraluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo è comunicata con almeno tre giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. 

La presa visione del progetto ed  il sopralluogo sulle are interessate dovrà essere effettuato da uno dei seguenti soggetti : 
­	legale rappresentante o direttore tecnico o tecnico qualificato, munito di delega, dell’ impresa concorrente, oppure;
­	legale rappresentante o direttore tecnico o tecnico qualificato, munito di delega , di almeno una delle imprese consorziate, in caso di consorzio, ovvero, dell'impresa mandataria, in caso di associazione o GEIE costituiti, ovvero, dell'impresa che, in sede di offerta, sarà indicata quale mandataria, in caso di associazione o di consorzio o di GEIE da costituirsi, oppure;
­	progettista o almeno uno dei progettisti indicato/i ovvero associato/i per l'attività di progettazione.

Nella busta “ B   - Offerta  Tecnica   ” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti :

1.	documentazione (relazioni, elaborati grafici, specifiche tecniche, ecc.) atta a descrivere, con riferimento ai criteri A e B ed ai relativi sub-criteri, le soluzioni, gli accorgimenti e le procedure proposti dal concorrente;
2.	scheda riepilogativa di sintesi riportante, con riferimento ai criteri ed ai sub-criteri innanzi detti, le proposte formulate dal concorrente ed il confronto tra le stesse e le soluzioni indicate nel progetto definitivo con la specificazione delle motivazioni che le hanno determinate e dei vantaggi che si ritiene di poter conseguire. A tal fine, potrà essere utilizzato lo schema di rappresentazione di seguito indicato:

	Soluzione progetto definitivo	Proposta concorrente	Motivazione proposta concorrente	Vantaggi attesi	
1					
2					
…	………………..	………………..	………………..	………………..	

3.	dichiarazione attestante che, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione dell’opera, saranno rispettate le prescrizioni formulate dal CIPE con Deliberazione n. 113 del 20 dicembre 2004  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – n. 205 del 03/09/2005 (Part.I)

La documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 e la dichiarazione di cui al precedente punto 3 devono essere sottoscritte dal concorrente (per le associazioni temporanee o consorzi o GEIE non ancora costituiti, la documentazione medesima deve essere sottoscritta da tutti i soggetti interessati, ivi compreso il progettista che si intenda associare), nonché dal progettista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Anche sulla scorta degli indirizzi forniti dalla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Deliberazione n. 291 del 26 luglio 2001 e Determinazione n. 16 del 22 gennaio 2003) eventuali modifiche alla progettazione definitiva non potranno configurare un’alternativa progettuale, ma dovranno limitarsi ad innovazioni complementari e strumentali, nel rispetto delle linee essenziali e dell’impostazione del progetto definitivo posto a base di gara.. 

Criteri di compilazione dell’offerta tecnica

Nel presente appalto, di importo superiore alla soglia comunitaria, data la particolare rilevanza delle soluzioni progettuali, la progettazione esecutiva può essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall’appaltatore, che costituiranno parte integrante dell’offerta.

1.	Indicazioni e linee di orientamento per la proposizione di integrazioni tecniche migliorative

Le integrazioni tecniche migliorative, a titolo indicativo e non esaustivo, possono riguardare gli argomenti di seguito esposti:

1.1.	Miglioramento dell’efficienza idraulica complessiva dell’adduttore in pressione e delle consegne ai settori irrigui, ottenuto mediante i seguenti accorgimenti:
1.1.1.	Inserimento di una centrale idroelettrica alla fine del tratto terminale dell’adduttore principale, in corrispondenza della restituzione della portata nel canale a pelo libero nei pressi dell’impianto di sollevamento “Campagnolo”. Qualora proposta dall’offerente, la centrale idroelettrica dovrà essere completa delle apparecchiature (gruppi turbo-generatore azionati da turbine in grado di sfruttare una portata complessiva giudicata variabile da 100 l/s a 6.000 l/s, con un salto variabile da 24 m a 1 m, pressione idrostatica di 30 m, con potenza massima complessiva all’asse delle macchine di 600 kW, con generatori asincroni a 50 Hz); l’offerta dovrà comprendere il by-pass delle turbine con relativo organo di sezionamento, il trasformatore con tensioni a vuoto di 20.000/400 V, il collegamento alla linea ENEL ed il fabbricato per l’alloggiamento delle apparecchiature.
1.1.2.	Sostituzione delle apparecchiature dell’impianto di sollevamento di Campagnolo. L’impianto, attualmente costituito da n. 5 pompe da 150 l/s con prevalenza di 48 m, potrà essere razionalizzato con l’installazione di nuove pompe aventi le stesse caratteristiche di portata e prevalenza geodetica, ma del tipo booster, al fine di recuperare il carico idraulico disponibile nell’adduttore, variabile da 1 m a 23 m.
1.1.3.	Adeguamento delle caratteristiche delle apparecchiature degli impianti di sollevamento n. 5 e n. 6 BAS-03. La proposta di miglioramento dovrà tenere conto dell’incremento del carico idraulico nell’adduttore in conseguenza del progetto di completamento, incremento valutato in misura variabile da m 1 a m 15, con conseguente riduzione della prevalenza monometrica delle pompe.
1.1.4.	Adeguamento dei manufatti di immissione alle vasche di compenso 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 BAS-03. La proposta di miglioramento dovrà tendere alla eliminazione dell’effetto by-pass e consentire il convogliamento delle portate in vasca, prima della derivazione per la distribuzione: tale obiettivo potrebbe, ad esempio, essere raggiunto mediante la separazione del flusso di arrivo in vasca da quello in uscita e con la installazione di una paratoia in corrispondenza dell’arrivo, di caratteristiche analoghe a quella posta sulla partenza.
1.1.5.	Miglioramento della risposta delle apparecchiature degli impianti di sollevamento n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 BAS-03 ai fenomeni di moto vario conseguenti alle variazioni di regime nell’adduttore e negli stessi impianti. La proposta di miglioramento potrebbe, a titolo esemplificativo, prevedere l’interposizione di valvole di massima pressione o casse d’aria tra l’impianto di sollevamento e l’arrivo e/o la mandata 

1.2.	Miglioramento della resistenza alla corrosione del complesso adduttore-condotte di alimentazione delle vasche di compenso BAS-03. L’appaltatore potrà valutare l’opportunità di integrare l’offerta mediante la protezione catodica delle condotte in acciaio di mandata  dagli impianti di sollevamento n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alle rispettive vasche di compenso. La proposta potrà prevedere la realizzazione di impianti autonomi o, se gli alimentatori già installati per l’adduttore sono di caratteristiche adeguate, il collegamento agli stessi delle condotte da proteggere, con i dispositivi di isolamento ritenuti necessari, tipo giunti isolanti di linea da interporre tra la condotta ed i manufatti degli impianti di sollevamento e delle camere di manovra delle vasche.

1.3.	Opere di miglioramento delle caratteristiche statiche dell’adduttore e delle opere di alimentazione e derivazione:
1.3.1.	Consolidamento del canale scatolare di scarico dalla centrale idroelettrica di San Giuliano. L’offerente potrà proporre, a titolo esemplificativo, la realizzazione di un’opera di sostegno al piede del rilevato in corrispondenza dell’alveo del fiume Bradano.
1.3.2.	Adeguamento della tenuta idraulica della galleria di derivazione dalla diga. Il miglioramento eventualmente proposto dall’offerente potrebbe consistere, a titolo esemplificativo, nella sostituzione delle n. 3 porte stagne presenti lungo il tracciato della galleria o delle sole guarnizioni di tenuta, con altre di caratteristiche più rispondenti alle maggiori pressioni prevedibili con la riconversione dell’adduttore;
1.3.3.	Blindatura in testa alla galleria di derivazione, in corrispondenza dello sbocco dei diffusori delle turbine. La proposta di miglioramento potrà prevedere una miglior protezione delle pareti della galleria alla separazione dalla camera delle turbine, eventualmente con la riprofilatura delle superfici finalizzata alla riduzione delle perdite idrauliche di sbocco dei diffusori nella galleria;
1.3.4.	Opere a salvaguardia delle strade di accesso alle vasche di compenso n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. L’offerente potrà proporre, a tale fine, la realizzazione di cunette, tombini di attraversamento, muri di sottoscarpa  e di controripa;
1.3.5.	Miglioramento delle caratteristiche della pavimentazione della strada di accesso alla vasca 7 BAS-03. L’offerta di miglioramento potrà prevedere la regolarizzazione della massicciata e la posa della sovrastruttura in conglomerato bituminoso.

2.	Misure per la riduzione dell’impatto dei lavori

2.1.	Misure atte alla mitigazione e ripristino ambientale. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni dell’allegato 1 della Deliberazione 20.12.2004 del CIPE, per la parte che attiene all’appaltatore. Inoltre l’appaltatore potrà integrare la propria offerta con l’impegno economico conseguente al rispetto specificamente dei punti delle stesse prescrizioni della citata delibera CIPE, che di seguito si riportano:
In fase di realizzazione
2.1.1	Prima dell'inizio dell'intervento, sarà individuata su indicazione del Soggetto Aggiudicatore una ditta specializzata in possesso di iscrizione SOA per la categoria OS 25, il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.
2.1.2	Per assicurare la sorveglianza archeologica la ditta, di cui al punto precedente, individuerà archeologi, il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata. Per il medesimo scopo, la ditta, metterà a disposizione anche operai specializzati. Nel corso dei lavori dì movimento di terra, per ogni escavatore sarà assicurata la presenza contestuale di un archeologo e di un operaio specializzato. La Soprintendenza assumerà la direzione scientifica degli interventi e disporrà le modalità di esecuzione degli scavi archeologici che dovessero rendersi necessari e i cui oneri saranno a carico dell’ Ente Appaltante. A conclusione degli interventi di verifica archeologica, l'Ente Appaltante dovrà apportare tutte le eventuali modifiche  al progetto che dovessero rendersi necessarie per assicurare adeguatamente la tutela archeologica dell'area. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero per i beni e le attività culturali.

2.2.	Misure atte a mitigare le interferenze dei lavori sul servizio idrico ed a garantire il mantenimento dei livelli minimi di esercizio irriguo, nella stagione che va da marzo-aprile a tutto ottobre. L’offerente potrà utilmente proporre un cronoprogramma dettagliato dei tempi, con l’indicazione di tutte le attività preliminari e di coordinamento, soluzione di eventuali allestimenti provvisionali, organizzazione delle diverse aree di lavoro e conseguente allestimento dei cantieri, tutti finalizzati alla detta continuità del servizio irriguo.

2.3.	Rimozione e trasporto a discarica delle condotte da dismettere lungo il sifone Bradano. Il progetto definitivo in appalto prevede, per il tronco di adduttore Bradano tra la strada provinciale in sinistra Bradano (Giannina) e la strada provinciale ex S.S. 175, un tracciato parallelo alla condotta esistente ed in esercizio, costituita da una tubazione interrata in c.a. DN 2250. L’offerente potrà valutare la possibilità di posizionare l’adduttore principale da vertice 1 a vertice 8 lungo il tracciato dell’adduttore in c.a. in esercizio, previa rimozione e trasporto a discarica della tubazione esistente.

2.4.	Adeguamento ed utilizzazione delle gallerie in esercizio nel tratto tra il vertice 8 e il vertice 32. La previsione del progetto  definitivo in appalto prevede, nel tratto di adduttore Bradano, tra l’attraversamento della S.S. 175 e il tronco a pelo libero, di abbandonare il tracciato attualmente in esercizio per by-passare n. 4 gallerie di lunghezze pari a m 650, 830, 605 e 360 ed un sifone di 220 m, tutti di caratteristiche non adeguate al funzionamento in pressione. In particolare, le gallerie presentano un rivestimento in calcestruzzo o in blocchi, mentre il sifone è costituita da una tubazione in cemento armato. In alternativa alla soluzione del progetto definitivo, l’offerente potrà proporre una soluzione che utilizzi il tracciato attuale dell’adduttore, con le indicazioni degli interventi necessari ad adeguare le caratteristiche delle gallerie e del sifone ai carichi statici ed idraulici conseguenti alla riconversione.

2.5.	Alternativa di tracciato del San Marco Venella lungo la S.P. di Pizziche. Il progetto definitivo in appalto prevede, per il tronco di adduttore denominato “San Marco – Venella”, un primo tratto lungo il tracciato seguito da una condotta in acciaio DN 900 interrata, da rimuovere e, per un secondo tratto, un tracciato lungo una fascia da espropriare e, infine, il tracciato lungo il canale in esercizio. In alternativa alla soluzione del progetto definitivo, l’offerente potrà proporre una soluzione che utilizzi il tracciato della condotta esistente per l’intero percorso dal nodo di Girifalco fino alla vasca terminale, in una fascia già espropriata che, nell’ultimo tratto, fiancheggia la strada provinciale di Pizziche.

Modalità di presentazione delle integrazioni migliorative

La completezza, affidabilità e documentazione delle integrazioni migliorative proposte, sia per i miglioramenti delle caratteristiche delle opere, che per la riduzione dell’impatto dei lavori, sarà documentata mediante l’indicazione vincolante delle lavorazioni, dei materiali, dei prodotti, dei componenti e delle apparecchiature. Di questi ultimi dovrà essere chiaramente indicata la qualità e conformità dei prodotti proposti, la precisa descrizione delle modalità di posa e montaggio, la completezza di ogni accessorio e tutti gli oneri e lavorazioni per dare l’opera perfettamente eseguita.
Tali integrazioni migliorative dovranno risultare da specifici elaborati che comprenderanno:
a.	Elenco numerato riassuntivo e riepilogativo di tutte le integrazioni migliorative proposte, seguendo la numerazione già indicata nel disciplinare di gara;
b.	Relazione illustrativa con descrizioni tecniche dettagliate e la motivazione delle proposte;
c.	Scheda tecnica riassuntiva con individuazione degli obiettivi e miglioramenti conseguibili;
d.	Elaborati grafici e di dettaglio delle integrazioni tecniche migliorative proposte;
e.	Computo metrico estimativo dettagliato e quadro comparativo delle proposte, valutati con gli stessi prezzi del progetto definitivo in appalto o, se mancanti, con nuovi prezzi ricavati con analisi aventi a base gli stessi criteri del citato progetto.

Nella busta “C  - Offerta  Economica    ” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti 

1)	dichiarazione   contenente:
l’indicazione del prezzo globale  inferiore al prezzo complessivo dell’appalto al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso  espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo, che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n. 109/94 e s. m., mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara; 

2)	dichiarazione indicante il tempo massimo di esecuzione dei lavori;

La  dichiarazione di cui ai suddetti punti 1) e 2) devono essere  rese: nel caso di concorrente singolo ovvero di associazione temporanea o di consorzio o GEIE costituiti, dal  legale rappresentante del concorrente; nel caso di associazione temporanea o di consorzio o GEIE da costituirsi, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio o GEIE. L’offerta dovrà essere sottoscritta, altresì, dal progettista eventualmente associato. Le  dichiarazioni  possono  essere sottoscritte  anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata la relativa procura notarile o copia autenticata della relativa procura  notarile, qualora la stessa non sia compiegata nella “Busta A – documentazione amministrativa

3)	lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo globale richiesto. 
Si precisa che la lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nelle settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. 

Si precisa inoltre che:
•	la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito per la parte a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;
•	il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta relativamente alla parte a corpo, previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico ed il capitolato speciale d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale richiesto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Tale prezzo è da intendersi al netto dell’importo inerente gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed al netto dell’importo inerente le spese di progettazione, anch’esso non soggetto a ribasso. Il prezzo globale ed i ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella dichiarazione. 
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b) devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo complessivo dell’appalto al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso, “Po” il prezzo globale richiesto.

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 

Si precisa che a voce uguale dovrà corrispondere un prezzo unitario uguale anche se la voce stessa compare più volte nella “Lista”. In caso di difformità tra prezzi unitari relativi alle medesime categorie di lavorazioni e forniture (come eventualmente corretti in base alla “percentuale di discordanza”) sarà considerato contrattuale quello di importo minore. La verifica della corrispondenza tra prezzi unitari relativi ad una stessa voce e la uniformazione degli stessi ( da cui può derivare la riduzione dell’importo contrattuale) sarà effettuata dalla stazione appaltante soltanto nei confronti del miglior offerente, a valle della verifica dei conteggi.

La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

4) 	le giustificazioni dei prezzi offerti relativi alle voci più significative che concorrono a formare un importo pari al 75% della basa d’asta della lista delle categorie di lavorazioni e forniture per la esecuzione dei lavori, sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Le giustificazioni dovranno riguardare almeno i prezzi relativi alle seguenti voci di elenco: NP25 (trattamento impermeabilizzante delle superfici di gallerie); VIII.004.192 (iniezione di miscela di cemento e sabbia); IX.001.004 (riempimento dei cavi con materiale arido); NP05a (fornitura e posa di tubazione in acciaio DN 2400); NP05b (fornitura e posa di tubazione in acciaio DN 2200); NP05c (fornitura e posa di tubazione in acciaio DN 2000); NP05d (fornitura e posa di tubazione in acciaio DN 1800); XI.001.003b (scavo di sbancamento a larga sezione per apertura trincee).

H.  Procedura di aggiudicazione

La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura dei plichi, in seduta pubblica, procederà : 

a)	verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b)	verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A – Documentazione”, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c)	verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 109/94 e s. m. hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
d)	verificare che più concorrenti non abbiano indicato o associato lo stesso progettista ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;
e)	verificare se i progettisti indicati o associati non abbiano partecipato alla redazione del progetto posto a base di gara ed in caso positivo ad escludere dalla gara il concorrente o i concorrenti che non abbiano rispettato tale divieto;
f)	a sorteggiare un numero di concorrenti, pari al 10% per cento del numero dei concorrenti ammessi arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi dell’art. 10 comma 1-quater, della legge n. 109/94 e s. m. - tramite fax inviato al numero indicato alla lettera v) della dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei documenti da inserire nella busta “A – Documentazione” - viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso della prescritta cifra d’affari in lavori, secondo quanto previsto all’art. 18 commi 3 e 4 del D.P.R. 34/2000, qualora non già prodotta.

La commissione di gara procede, altresì, nella stessa seduta o in sedute successive riservate, ove necessario, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara richiede alla stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti di effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A - Documentazione”.

La commissione di gara poi procederà, in seduta pubblica,  da tenersi nella data che sarà  comunicata tramite fax inviato a tutti i concorrenti ammessi :

a)	all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali;
b)	all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso del requisito speciale, relativo alla prescritta cifra d’affari, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata;
c)	 alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 10, comma 1-quater della legge n. 109/94 e s. m. e dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. 34/2000, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

La commissione di gara procederà  poi all’apertura delle buste “B - offerta tecnica”; in una o più sedute riservate, la commissione  procederà alla valutazione  della documentazione in essa  contenuta e all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando, a tal fine, i criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare.

Successivamente la commissione di gara procederà in seduta pubblica da tenersi nella data che sarà comunicata tramite fax a tutti i concorrenti ammessi : 
1.	a rendere noti i punteggi totali assegnati alle offerte tecniche;
2.	ad aprire le buste “C – offerta economica ed indicazione del tempo massimo di esecuzione” contenenti le offerte relative al prezzo offerto ed alla riduzione de tempo presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e, previa verifica della regolarità delle stesse, a leggere il prezzo offerto  ed il tempo massimo di esecuzione dei lavori;
3.	ad attribuire i punteggi relativi  all’offerta economica
4.	a sommare, per ciascun concorrente, il punteggio relativo all’offerta tecnica a quello relativo all’offerta economica e a stilare la graduatoria .

La commissione di gara – ove il punteggio complessivo dell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l’elemento economico (ribasso) che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel bando di gara  ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel bando di gara,  informa il responsabile del procedimento di tale situazione. Questi, qualora le giustificazioni contenute nell’offerta non siano ritenute sufficienti, comunica al concorrente tale fatto e lo invita a fornire, entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, i necessari chiarimenti e ulteriori giustificazioni in  merito agli elementi costitutivi dell’offerta. Successivamente il responsabile del procedimento, avvalendosi anche di organismi tecnici, verifica, consultando l’offerente, i chiarimenti e le giustificazioni acquisite, e tenendo conto delle giustificazioni fornite, comunica le proprie decisioni alla commissione giudicatrice che pronuncia l’esclusione della offerta ritenuta eventualmente non congrua: In tal caso la commissione procede alla formulazione di una nuova graduatoria e ove si presenti la situazione prima specificata, procede ad una nuova segnalazione al responsabile del procedimento. 

La stazione appaltante, procederà, con riferimento  ai concorrenti primo e secondo classificato nella graduatoria di gara, se non già  sorteggiati, al controllo delle veridicità della dichiarazioni sostitutive contenute nella busta A, alla verifica dei requisiti progettuali richiesti alla lettera nel presente disciplinare, nonché alla verifica della validità dell’attestato SOA, tramite il casellario informatico dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Nel caso la suddetta verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procederà: 
-	all’esclusione del concorrente;
-	ove ne ricorrano i presupposti, all’adozione delle misure previste dall’art. 10, comma 1quater, della legge 109/94 e s.m.i..

Nel caso di più offerte, risultate prime in graduatoria e non escluse, che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che abbia  riportato il maggiore punteggio relativo al valore tecnico delle soluzioni proposte.. Nell’ipotesi in cui anche tale punteggio risultasse uguale, si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che abbia offerto il prezzo più basso. Semmai il punteggio risultasse ancora uguale, si procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che abbia offerto il tempo massimo di esecuzione dei lavori minore. In caso di ulteriore parità, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.

I - Documentazione comprovante i requisiti tecnico-economici:
	
Comprova requisiti speciali dei Costruttori :

a) 	ATTESTAZIONE RILASCIATA DA SOCIETÀ DI ATTESTAZIONE (S.O.A.) ai sensi del D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata in originale o copia autenticata in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi dei lavori per i quali il concorrente si qualifica; resta inteso che, con riferimento all'art. 4 del DPR 34/2000, il soggetto sottoposto a verifica (sorteggiato o aggiudicatario provvisorio o secondo in graduatoria), ove provvisto di attestato SOA privo della dicitura attestante il possesso del requisito di cui all'art. 2 c. 1 lettera q) o r) del DPR 34/2000, in quanto rilasciata in epoca in cui tale requisito non era obbligatorio, dovrà produrre, in originale o copia autenticata da notaio o autorità amministrativa, certificato del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ovvero una dichiarazione, nelle stesse forme, della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale rilasciata da un soggetto accreditato ai sensi delle UNI CEI EN 45000 (certificatore di qualità) [ad eccezione delle imprese qualificate per classifiche di importo SOA in relazione alle quali il DPR 34/2000, alla data di pubblicazione del presente bando, non richiedeva il requisito medesimo].
Le Imprese con sede in altro Stato membro dell'Unione Europea o con sede in altro Paese firmatario dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso in ambito WTO, prive di Attestazione SOA, dovranno produrre la documentazione prevista dalle normative vigenti nei rispettivi Paesi per la dimostrazione del possesso dei requisiti corrispondenti a quelli richiesti alle imprese italiane dall'art. 18 del D.P.R. 34/2000 per il rilascio di attestazione SOA per categorie e classifiche corrispondenti a quelle richieste ai fini della partecipazione al presente appalto (art. 3 com. 7 D.P.R. 34/2000).
b) 	Documenti comprovanti l’effettivo possesso del requisito della Cifra di affari in lavori. In particolare:
b. 1) 	documenti richiesti a dimostrazione del requisito della CIFRA DI AFFARI IN LAVORI, relativa ad attività diretta:
- 	dichiarazioni annuali I.V.A. e Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione, per le Ditte individuali, le Società di persone, per i Consorzi di Cooperative, per i Consorzi tra Imprese Artigiane e per i Consorzi stabili. Se gli stessi Soggetti svolgono attività di costruzione unitamente ad altre attività, le dichiarazioni I.V.A. e il Modello Unico devono essere accompagnati da autocertificazione del Legale Rappresentante che ripartisca il volume d’affari fra le diverse attività;
- 	bilanci annuali (compresa la nota integrativa redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile), riclassificati e corredati da relativa nota di deposito, per le Società di capitale e le Società di Cooperative.Se le stesse Società svolgono attività di costruzione unitamente ad altre attività, e la nota integrativa non ripartisca con precisione il volume d’affari nelle diverse attività, deve essere in aggiunta prodotta un’autocertificazione del Legale Rappresentante che fornisca tali informazioni.
b. 2) 	documenti richiesti a dimostrazione del requisito della CIFRA DI AFFARI IN LAVORI, relativa ad attività indiretta:
- 	bilanci annuali (compresa la nota integrativa redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile), riclassificati e corredati da relativa nota di deposito, dei Consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere e), e-bis) della Legge n. 109/94 e s.m.i., e delle Società fra Imprese riunite dei quali l’Impresa fa parte (sempre che questi Soggetti abbiano fatturato direttamente al Committente e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte delle Imprese consorziate).Ai fini della dimostrazione della CIFRA D'AFFARI assumono rilievo i bilanci ed i modelli effettivamente depositati e presentati al momento della pubblicazione del presente bando su GUCE.

Comprova requisiti speciali dei Progettisti (“Associati” o “Individuati”):

a ) 	I documenti richiesti a dimostrazione del requisito del fatturato globale (punto 2.1) del presente disciplinare), sono:

- 	Dichiarazioni annuali I.V.A. o Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione, per i Liberi professionisti singoli o Associati (art. 17, comma 1, lett. d) legge 109/94 e s.m.i.), le Società di professionisti (art. 17, comma 1 lett. e) legge 109/94 e s.m.i.), i Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti menzionati (art. 17, comma 1 lett. g) legge 109/94 e s.m.i.) e per i Consorzi stabili di Società di professionisti (art. 17, comma 1 lett. g-bis) legge 109/94 e s.m.i.). Se gli stessi soggetti svolgono servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. unitamente ad altre attività, le dichiarazioni I.V.A. o il Modello Unico devono essere accompagnati da autocertificazione del Legale Rappresentante che ripartisca il volume del fatturato globale fra le diverse attività.
- 	Bilanci annuali (compresa la nota integrativa redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile), riclassificati e corredati da relativa nota di deposito, per le Società di ingegneria (art. 17, comma 1 lett. f) legge 109/94 e s.m.i.), i Raggruppamenti temporanei costituiti da Società di ingegneria (art. 17, comma 1 lett. g) legge 109/94 e s.m.i.) e i Consorzi stabili tra Società di ingegneria (art. 17, comma 1 lett. g-bis) legge 109/94 e s.m.i.). Se gli stessi soggetti svolgono servizi di cui all’art. 50 del DPR 554/1999 e s.m.i. unitamente ad altre attività, e la nota integrativa non ripartisca con precisione il volume del fatturato globale nelle diverse attività, deve essere in aggiunta prodotta un’autocertificazione del Legale Rappresentante che fornisca tali informazioni. Si precisa che per la presentazione della documentazione sopra descritta (Dichiarazioni annuali I.V.A. o Modello Unico, Bilanci annuali) il quinquennio di riferimento è quello degli ultimi 5 (cinque) bilanci, modelli e dichiarazioni effettivamente depositati e presentati dal Progettista Associato o Individuato alla data di pubblicazione del presente bando di gara su GUCE.
b) 	I documenti richiesti a dimostrazione del requisito di cui al punto 2.2) del presente disciplinare sono:
- 	certificati attestanti l'esecuzione delle prestazioni rilasciati dai Committenti, ovvero
- 	copia dei contratti da cui si evincono gli incarichi per l'espletamento dei servizi di cui al punto 2.2) del presente disciplinare  di gara, nonché, copia delle fatture quietanzate corrispondenti alle prestazioni eseguite per l'espletamento dei servizi di cui al punto 2.2)del presente bando di gara.
Si precisa che per la presentazione della documentazione sopra descritta (certificati e contratti) il decennio di riferimento è quello degli ultimi 120 (centoventi) mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara su GUCE.
c) 	I documenti richiesti a dimostrazione del requisito di cui al punto 2.3) del presente disciplinare di gara sono:
- 	certificato/i attestante/i l'esecuzione delle prestazioni rilasciate dai Committenti, ovvero
- 	copia dei contratti da cui si evincono gli incarichi per l'espletamento dei servizi di cui al punto 2.3) del presente disciplinare  di gara, nonché, copia delle fatture quietanzate corrispondenti alle prestazioni eseguite per l'espletamento dei servizi di cui al punto 2.3) del presente disciplinare  di gara.
Si precisa che per la presentazione della documentazione sopra descritta (Certificato/i e contratti) il decennio di riferimento è quello degli ultimi 120 (centoventi) mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara su GUCE.
d) 	I documenti richiesti a dimostrazione del requisito inerente l'organico tecnico, punto 2.4) del presente disciplinare di gara, sono, esemplificativamente:
- 	copia del libro matricola e/o copia di contratti di collaborazione su base annua.
Si precisa che per la presentazione della documentazione sopra descritta (Libro matricola e/o contratti di collaborazione) il triennio di riferimento è quello degli ultimi 3 (tre) anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara su GUCE.

L  - Comprova requisiti di ordine generale  :

a) 	certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura rilasciato dalla stessa C.C.I.A.A. competente per territorio, contenente:
- 	l'indicazione dei Legali rappresentanti per le Società diverse da quelle in nome collettivo oppure di tutti i Soci per le Società in nome collettivo;
- 	l'attestazione che la Società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data del rilascio del certificato stesso;
- 	la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
a 1)  nel caso di Cooperative o Consorzi fra Cooperative: Certificato di iscrizione nell’apposito registro Prefettizio o nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro;
b) 	certificato penale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti (dal quale non risulti l’applicazione della misura di sorveglianza speciale di cui all’art. 3 L. 1423/56) riferiti:
- 	al Titolare e al Direttore tecnico (se persona diversa dal Titolare), risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, se trattasi di Impresa individuale;
- 	al Direttore Tecnico risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed a tutti i soci, se trattasi di Società in nome collettivo;
- 	al Direttore Tecnico risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed a tutti i Soci Accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice;
- 	al Direttore Tecnico risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed agli Amministratori muniti di rappresentanza, per qualsiasi tipo di Società di capitali;
- 	al professionista singolo, ai professionisti associati, ai legali rappresentanti in caso di società ed in ogni caso al soggetto individuato ai fini della progettazione esecutiva.
c) 	certificazioni di iscrizione agli enti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile nel cui ambito territoriale ha sede l'Impresa, attestanti la regolarità della posizione dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici; detta attestazione dovrà avere riguardo all'Impresa nella sua generalità e non limitatamente ad un solo cantiere e pertanto sarà cura dell'Amministrazione appaltante provvedere alla richiesta dei suddetti certificati a tutte le sedi degli Enti suddetti, che saranno indicate dall'Impresa successivamente all’aggiudicazione.
d) 	certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della Legge 23 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili.
e) 	certificato della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale, di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente bando, dal quale risulti che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

M. – Ulteriore documentazione da presentare da parte dell’aggiudicataria

L’aggiudicataria dovrà firmare il contratto a rogito notarile presentandosi  nel luogo, giorno ed ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione sarà svincolata dal proprio obbligo  di stipulazione del contratto con l’impresa, ne incamererà la cauzione provvisoria e procederà alla stipula del contratto con il concorrente che segue in graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione dei documenti innanzi richiamati e precisamente  :

a)  	cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui agli artt. 30, comma 2, della legge 109/1994 e s.m.i., e 101 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., conforme  al modello (schema tipo) approvato con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004, n. 123;
b) 	polizza assicurativa“All risKs”escutibile a prima richiesta, specifica per l’appalto, che tenga indenne l’Amministrazione appaltante dai rischi derivanti dalla cattiva esecuzione dell’opera e che copra anche la responsabilità verso terzi; la relativa polizza dovrà essere preventivamente accettata dall’Amministrazione ed esibitala momento della stipula del contratto. La copertura assicurativa che dovrà avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e fino all’accettazione delle prestazioni rese ai fini dell’appalto, dovrà essere priva di franchigie. I massimali  assicurati dovranno essere i seguenti : R.C.T.   €  15.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di: € 5.200.000,00 per ogni persona e di €    5.200.000,00 per danni a cose, anche appartenenti a più persone; R.C.O. € 15.500.000,00 per  ogni sinistro con il limite di  € 1.200.000,00 per ogni persona.  
c) 	polizza assicurativa di cui agli artt. 30, comma 3, della legge 109/94 e s.m.i. e 103 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., conforme  al modello (schema tipo) approvato con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004, n. 123, per un massimale di € 589.855,82 che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di € 589.855,82.

Ai sensi dell'art. 8, comma 11quater, della legge 109/94 e s.m.i., le cauzioni e le garanzie fidejussorie previste, rispettivamente dai commi 1.e 2 dell' art. 30 della legge 109/94 e s.m.i., possono essere ridotte, del 50%, per le imprese in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati di tale sistema. Sulla base delle Determinazioni n. 44 del 27 settembre 2000 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, si precisa che:
•	in caso di impresa singola, essa potrà godere del beneficio della riduzione del 50% solo se in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione degli elementi significativi;
•	in caso di associazioni o consorzi, già costituiti o da costituirsi:
­	in caso di raggruppamento orizzontale di imprese, esso potrà godere del beneficio della riduzione del 50% solo se tutte le imprese del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità  ovvero della dichiarazione degli elementi significativi;
­	in caso di raggruppamento verticale di imprese, se tutte le imprese del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione degli elementi significativi, esso potrà godere del beneficio della riduzione del 50%; se, invece, solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione degli elementi significativi, esse potranno godere del beneficio della riduzione del 50% solo per la quota parte ad esse riferibile.

Sempre ai fini della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria ovvero il progettista individuato o associato, dovranno produrre, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, una dichiarazione, da parte di una compagnia di assicurazioni autorizza
ta, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di Responsabilità. civile professionale a favore del progettista, con riferimento ai lavori oggetto di progettazione. 

La stipulazione del contratto è inoltre subordinata agli adempimenti previsti dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".
Per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi, la stipulazione del contratto è altresì subordinata alle comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Pertanto, in questo caso l'aggiudicataria dovrà presentare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'Impresa (o di ciascuna delle Imprese associate), attestante la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.

N.  Informazioni complementari

A)  	Prescrizioni  integrative al capitolato speciale d’appalto

L’appaltatore ha l’obbligo di redigere il progetto esecutivo sulla base di quanto prescritto nel progetto definitivo posto a base di gara, in base ai contenuti del capitolato speciale d’appalto. Lo stesso appaltatore inoltre ha l’obbligo di assolvere in fase di redazione del progetto esecutivo e in fase di realizzazione  alle seguenti prescrizioni integrative,  (come disposto dalla delibera CIPE n. 113 del 20/12/2004) :
    
Prescrizioni  Ambientali.

In fase di redazione del progetto esecutivo:

1)  	dovranno  essere  dettagliatamente  studiate,  in  fase  di progettazione  esecutiva,  le opere di mitigazione (con riferimento a tutti i manufatti fuori terra) e ripristino ambientale e morfologico, con  modalità  di  «conservazione,  miglioramento  e ripristino» che garantiscano  il piu' possibile il mantenimento delle caratteristiche originarie  dei  luoghi.  Particolare  attenzione  si richiede per la riqualificazione  ambientale  dell'area  della Masseria S. Marco. Per tale  area  dovranno essere descritti gli interventi di progetto e le misure di mitigazione e/o le eventuali modifiche necessarie a ridurre l'impatto  che gli interventi determineranno sul complesso di elevato interesse  storico  architettonico. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
2)  per  il  completamento  da  realizzare si ritiene opportuno segnalare  la necessita' di limitare le opere provvisorie di cantiere al fine di contenere la fascia di ingombro nel tratto compreso fra la Masseria  S.  Marco  e  l'attraversamento  del  Bradano e di mitigare l'impatto  percettivo  che  l'intervento produrrebbe al sito visibile dalla  s.p. 175 e le strade Matera Metaponto. Particolare attenzione dovrà  essere praticata nell'attraversamento della parte sottostante la  Masseria  S. Marco,  emergenza  architettonica  rurale  a vincolo percettivo.  Sara'  opportuno  in  questo  caso  ridurre la fascia di ingombro  e  prevedere  il  recupero  del  sito (pianura su cui sorge l'emergenza,  scarpata  e  strada  statale  sottostante), mediante la messa a dimora di specie arboree ed arbustive tipiche della macchia mediterranea  (Leccio,   Acero  campestre,  Corbezzolo, Fillirea, Lentisco, Biancospino, etc.). Per quanto attiene l'eventuale presenza di  interventi  costeggianti filari di Eucaliptus (con esclusione del tratto   prospiciente   il   distributore  «Basile  Petroli»),  sara' opportuno  distaccarsi  da questi in modo da evitare di danneggiarli, consentendo l'abbattimento nel numero necessario nell'attraversamento ortogonale  alla  condotta.  Lo  stato  dei luoghi sara' ripristinato contestualmente  alla  realizzazione  delle  opere.  La  verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione

3)  dovrà essere prodotta una sequenza fotografica ante e postoperam,  con  i  medesimi  coni  visuali,  che documenti lo stato dei lavori  finali  in  rapporto  alla situazione precedente i lavori. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
4) 	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
5)  prevedere la riprofilatura del terreno, dopo l'interramento della  condotta, come preesistente. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione;
6)  prevedere  la realizzazione dei ripristini geomorfologici e vegetazionali  mediante  tecniche di ingegneria naturalistica e l'uso di essenze  erbacee, arbustive  ed  arboree  di  tipo  autoctono certificato di  ecotipi locali di provenienza regionale. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.

    In fase di realizzazione:

7) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
8)  prima  dell'inizio dei lavori, procedere ad un sopralluogo congiunto fra Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di  Potenza,  impresa  aggiudicataria, direzione lavori, e funzionari regionali,  al  fine di meglio valutare in loco situazioni ed aspetti esecutivi non facilmente verificabili dagli elaborati progettuali. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
9)  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
10) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
11) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
12) ridurre  al  minimo  i  movimenti  di  terra che, comunque, devono  essere  contenuti  nell'ambito  del  progetto. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione;
13) garantire  l'esito  dei  lavori  di  ripristino  fino  al definitivo  affrancamento  dell'impianto. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione;
14) effettuare  il  taglio  delle piante, nei boschi trattati a ceduo,  lungo  la  fascia  di servizio, in modo da favorire un pronto ricaccio  delle  ceppaie.  La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione;
15) proteggere  le  ceppaie   dal   transito  delle  macchine operatrici  con  l'adozione  di  idonei  accorgimenti. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione;
16) attenersi alle direttive che l'Ufficio foreste e tutela del territorio dovesse imporre in corso di esecuzione dei lavori, in modo particolare  alla  verifica  dello stato di stabilita' dei versanti interessanti  dei  lavori. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura della regione.

B) Clausole Antimafia
Fermo restando l’obbligo dell’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall’art. 18 comma12 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e s.m.i : 

1.	Tutti gli affidamenti a valle dell’aggiudicazione principale saranno subordinati all’espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera di procedere alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione della Impresa, in caso di informazioni positive. Per i sub-contratti oggetto dell’estensione di importo inferiore a quello indicato all’art. 10 comma1,lettera c) del D.P.R. n. 252/98, l’autorizzazione di cui all’art. 18 della legge 55/90 potrà essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l’apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Saranno esenti dall’espletamento delle verifiche antimafia gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all’importo di 50 mila euro, fermo restando l’obbligo di conferimento dei dati del fornitore.
2.	Nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa,l’appaltatore principale applicherà una penale, a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto,salvo maggior danno. 
3.	Saranno valutate dalla Stazione Appaltante le cd. Informazioni supplementari atipiche, di cui all’art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e s.m.i., ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98.
4.	Sono previste le sottoesposte misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell’opera diretta a :
a)	controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie,fino a completamento della esecuzione dell’opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni,dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell’obbligo di comunicazione;
b)	assicurare che i tentativi di pressione criminale sull’impresa affidataria e su quelle sub- affidatarie, nella fase di cantierizzazione ( illecite richieste di denaro,” offerte di protezione” ecc.) fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria, vengano immediatamente comunicati alla prefettura, a pena di sanzione di revoca degli affidamenti. 
C) Procedura espropriativa
La stazione appaltante è “autorità espropriante” ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e svolgerà il procedimento espropriativo, finalizzato alla realizzazione dell’intervento, da attuarsi nel rispetto delle disposizioni contenute nel richiamato decreto e nell’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 20 agosto 2002, n. 190. Sono, ad ogni buon fine confermate le fasi del procedimento espropriativo già utilmente concluse e/o avviate dalla Regione Basilicata in conseguenza della deliberazione di Giunta Regionale n. 137 del 27.01.2004, con la quale è stata, tra l’altro, dichiarata la pubblica utilità dell’intervento. A tali fini, la stazione appaltante demanda all’appaltatore tutte le attività d’ordine preparatorio e/o gestionale, siano esse di carattere tecnico e/o amministrativo, per il cui svolgimento non spetterà alcun compenso. Le direttive saranno impartite direttamente dall’Ufficio della Direzione lavori.

Ulteriori informazioni :
a) 	l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, spese di progettazone e redazione piano di sicurezza;
b) 	costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo deve essere effettuato secondo quanto disposto nel disciplinare di gara;
c) 	si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) 	l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) 	si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e s. m.;
f) 	è prevista la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10,comma 1-ter, della legge 109/94 e s.m.i., nonché, di cui all’art. 5, comma 12 bis e seguenti, della legge 80/2005;
g) 	le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
h) 	gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in euro;
i) 	i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
j) 	gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
o) 	i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
p) 	è esclusa la competenza arbitrale;

Avvertenze : 
Le offerte presentate non possono essere più ritirate.
Ferme restando le cause di esclusione riportate negli altri punti  del bando e del presente Disciplinare di gara, saranno escluse dalla gara:
a) 	Le offerte pervenute in buste non sigillate.
b) 	Le offerte che giungessero in ritardo per qualsiasi causa.
c) 	Le offerte fatte mediante telegramma, telex, telefax, anche se a modifica di altre fatte regolarmente.
d) 	Le offerte condizionate o comunque contenenti modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara.
e) 	Le offerte per persona da nominare.
f) 	Le offerte non sottoscritte.
g) 	In caso di Riunioni di Imprese e di Consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice Civile, formalmente non costituiti, le offerte che non siano sottoscritte in ciascuna pagina da tutte le imprese.
h) 	Le offerte che prevedono un termine di irrevocabilità inferiore a quello previsto nel bando, come eventualmente prorogato.
i) 	Le offerte prive del documento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria 
m) Le offerte che presentino correzioni non espressamente confermate e sottoscritte.
n) 	Le offerte recanti integrazioni o riduzioni delle quantità  relative alla parte a misura.
o) 	Le offerte che non siano corredate dalle dichiarazioni e dalla documentazione richiesta nel presente bando.
p) 	Le offerte che non recepiscano, le modifiche/integrazioni ai documenti posti a base di gara, e pubblicate dalla stazione appaltante. 
r) 	Ogni altro caso di difformità sostanziale inerente le offerte e/o la documentazione presentata a corredo delle stesse costituirà motivo di esclusione.
s) 	Nel caso di discordanza tra quanto riportato  nel presente disciplinare e quanto riportato nel capitolato speciale d’appalto del progetto, saranno considerati prevalenti i primi;
t) 	I plichi giunti a destinazione non potranno essere ritirati,sostituiti,integrati o,comunque modificati; In caso di più di una offerta presentata dallo stesso concorrente, queste saranno considerate tutte inesistenti e non si procederà all’apertura dei relativi plichi. Parimenti non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo i termini sopraindicati, oppure qualora gli stessi non siano idoneamente chiusi e sigillati.
u) 	Sono a totale carico dell’aggiudicatario tutte le spese dei  verbali di gara e di contratto a rogito notarile
v) 	La Stazione Appaltante  potrà, per motivate ragioni, disporre il rinvio della gara, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Il responsabile del procedimento: Ing. Antonio Cisterna.-  via Annunziatella, 64 – 75100 - Matera - tel. 0835248274

Il Responsabile del Procedimento
   ( Dott. Ing. Antonio Cisterna)
Allegati :
1.	domanda di partecipazione e dichiarazione;
2.	dichiarazione di impegno  a costituire l’A.T.I;
3.	dichiarazione per progettisti
4.	dichiarazione di impegno per i progettisti;
5.	dichiarazioni di ulteriori soggetti;
6.	attestato di presa visione;
7.	attestato di sopralluogo;
8.	dichiarazione subappalto
9.	modello Gap